검단2일반산업단지 개발사업 동의안

인천광역시

검단2일반산업단지 개발사업 동의안

의 안 번 호	207		제출연월일 : 2018. 11. .
			제 출 자 : 인천광역시장

□ 제안이유

○ 본 사업은 市 정책 사업 추진을 통해 북부권역 균형발전을 실현하기 위한 공익사업임.

○ 지역 내 산재된 공장 재배치 및 환경 친화적 산업단지 조성 기반을 마련하기 위하여 지방공기업법에 의거, 市議會 동의를 받고자 함.

□ 주요내용

○ 사업개요

- 사 업 명 : 검단2일반산업단지 개발사업

- 위    치 : 인천광역시 서구 오류동 일원

- 근 거 법 : 산업입지 및 개발에 관한 법률

- 절차진행 : 산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법

□ 동의(승인)사항

○ 관련근거(지방공기업법 제65조의3*)

* 200억이상 신규사업 투자사업에 대하여 지방자치단체장 보고 및 의회 의결

○ 동의(승인) 사항

- 위    치 : 인천광역시 서구 오류동 일원

- 면    적 : 843,555㎡

- 사 업 비 : 3,859억원

- 사업기간 : 2018년~2024년

- 시 행 자 : 인천도시공사

□ 참고사항

○ 현금흐름

(단위:억원)

구 분	금 액	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
수 입	4,183			91	647	1,036	1,135	866	408
지 출	3,859	34	38	1,747	757	655	525	56	47
과 부 족	324	△34	△38	△1,656	△110	381	610	810	361
과부족 누계		△34	△72	△1,728	△1,838	△1,457	△847	△37	324

○ 사업 타당성 검토

구분	검토결과	비고
총사업비	3,769억원
총회수비	4,183억원
경상이익	414억원
세후이익	324억원	법인세 차감
NPV	48억원	NPV 〉 0 ⇒ 타당성 확보
B/C	1.02	B/C 〉 1 ⇒ 타당성 확보
IRR	5.5%	IRR 〉 할인율(4.5%) ⇒ 타당성 확보

○ 지역경제에 미치는 영향

- 생산유발효과 1,707억원, 소득유발효과 424억원, 고용유발효과 1,379명